투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약변경 의뢰[탄천물재생센터 총인처리시설 기계공사 준공기한 연장]

우리 본부에서 추진중인 □탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사□  공사 준공기한을 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(2차)

2. 계약업체 : ㈜이수에이치앤씨 외 2

3. 변경계약 내용

구분	계약금액(원)			계약기간
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
**	*************	*************	****	***********************	***********************	*****
**	*************	*************	****	***********************	***********************	*****

4. 변경사유 : 선행공정인 토목 구조물 여과수조 개량공사 지연 등

5. 귀책기관 및 지체상금 부과여부 : 서울시(미부과)

6. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비 자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설비(하수도사업특별회계)

붙  임 :  1. 공기연장 및 차수조정 검토 보고서 1부

2. 책임건설사업관리자 검토서 및 합의각서 등 각 1부.

	설비부장
주무관	나경운		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	11/24 이달영
협조자
시행	설비부-18371	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)