투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 오수처리장 폐기물 수집 운반 용역 설계변경 시행

1. 시설과-1563(2020.2.24.)호 및 총무과-2805(2020.03.06.)호와 관련입니다.

2. 2020년 오수처리장 폐기물 수집 운반 용역에 대하여 붙임 사유로 아래와 같이 설계변경 코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2020년 오수처리장 폐기물 수집 운반 용역

나. 완수기간 : 2020. 3. 4. ～ 2020. 12. 30.

다. 계 약 자 : **************

라. 설계변경 내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증․감	비 고
총용역비	**********	**********	**********
처리물량	****	*******	********

마. 설계변경사유 : 예정물량으로 계약한 용역으로, 실제 처리 물량에 대한 정산

내역으로 설계변경

바. 예산과목 : 산림내이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 공공운영비

따로붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 2020년 폐기물 인계서 6부.  끝.

주무관	임윤석		주무관	김지만		시설과장	11/24 손병대
협조자	주무관	박진선
시행	시설과-8743	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/	yeslimys@seoul.go.kr	/	부분공개(5)