문서번호	보행정책과-15340
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
교통전문관	도로공간재편팀장	보행정책과장
김태림	정상모	11/25 이상국

2020년 보행특구 조성 설계용역 계약변경

2020.11.

도시교통실

[보행정책과]

2020년 보행특구 조성 설계용역 계약변경

위 사업의 교통안전시설심의 일정을 고려한 실시설계용역 과업기간 연장이 필요한 바, 2020년 보행특구 조성 설계용역의 계약기간을 변경 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명: 2020 보행특구 조성 기본 및 실시설계 용역

○ 과업기간: ’20.3.2.~12.1.

○ 과업내용: 북촌·무교 보행특구 보행환경개선사업

○ 계약업체: ㈜대한콘설탄트

○ 용 역 비: 196,114,900원

□ 변경내용

○ 계약기간 연장

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
계약기간	’20.03.02~’20.12.01.	’20.03.02~’21.04.30.	5개월 연장

○ 변경사유

- 본 과업은 경찰서 및 경찰청 교통안전시설심의가 수반되어야 하는 기본 및 실시설계용역으로

- 과업범위에 해당하는 종로·남대문경찰서 교통안전시설심의 일정 미확정으로 인해 경찰청 심의결과의 실시설계 반영에 시일이 소요되기에 용역 과업기간 연장이 필요함

○ 귀책사유: 계약상대자에게 귀책사유 없음

□ 추진사항

************************

*****************************************

*******************************

**********************************

************************

****************************************

*********************************

********************

**************************************

*****************************

**********************************

□ 향후계획

○ ’20.11.	: 용역 설계변경(계약기간 변경)

○ ’21.1.~2.	: 경찰서 및 경찰청 교통안전시설심의 완료

○ ’21.3.	: 최종보고회 개최

○ ’21.4.	: 용역 준공

붙  임: 1. 합의각서 1부.

2. 변경 과업내용서 1부.  끝.