문서번호	토목부-22830
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	11/25 김용제
협조
	주무관		이상근

폐기물처리용역 설계변경(2차 3회)검토보고

[신림공영차고지(저류조 포함)건설공사 건설폐기물처리용역]

2020. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

폐기물처리용역 설계변경(2차 3회)검토보고

[신림공영차고지(저류조 포함)건설공사 건설폐기물처리용역]

“신림공영차고지(저류조 포함)건설공사” 의 준공일이 도래함에 따라 건설폐기물처리물량을 정산 반영하여 설계 변경코자 검토 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

○ 건설폐기물처리용역 설계변경(2차3회) 제출 제일(발)-2020-3802(2020.11.13.)호]

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 신림공영차고지(저류조포함)건설공사 건설폐기물처리용역

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2번지 일대

○ 용 역 비 : 647,790천원(2차 : 594,081천원)

○ 기    간 : '19.7.25. ~ '21.9.29.(2차 : '20.1.1.~'20.12.31.)

○ 용 역 사 : 하늘환경, ㈜방태

Ⅲ		설계변경 내용

○ 2차 용역 준공일 도래에 따라 건설폐기물 발생량과 일치하도록 계약금액 수량을 정산 변경이 필요함.

○ 용역비 및 용역기간

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
총차	용역비	***********	***********	*	*****
	용역기간	***********************	***********************	*	*****
2차	용역비	***********	***********	************
	용역기간	***********************	***********************	*	*****

○ 폐기물 수량 내역(2차 3회)

공 종	단위	수 량			비고
		당초	변경	증·감
1. 폐기물 운반
폐콘크리트 운반	㎥	***	***	*******
폐아스콘 운반	㎥	**	*	*******
혼합폐기물 운반	㎥	*****	*****	*
2. 폐기물 처리
폐콘크리트 처리	ton	***	*****	*******
폐아스콘 처리	ton	***	*	*******
혼합폐기물 처리	ton	*****	*****	*
3. 스마트 송장(운반비*1.5%)	식	*	*	*

○ 용역비 변경 내역(2차 3회)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	폐기물 운반비	******	******	************
	폐기물 처리비	*******	*******	************
	스마트 송장	***	***	************
	계	*******	*******	************
제잡비 및 부가세		******	******	************
용역비 계		*******	*******	************

Ⅳ		조 치 의 견

○ 위 보고 내용과 같이 공사 준공일 도래에 따라 건설폐기물 실 발생량과 일치하도록 계약 수량을 정산한 설계변경을 검토한 결과 적정하므로 승인코자 함.

붙임 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 변경내역서(2차 3회) 1부.  끝.