투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	예비준공검사 시행 및 참석요청(남산예장자락 재생사업)

1. 관련근거

가. “건설공사 예비준공검사 시행 방법 개선” 기술심사담당관-10083(2018. 6. 28.)

나. “도로 등 시설물 유지관리사무 개선 방안” 도로계획과-17186(2019. 12. 13.)

2. 우리시(본부)에서 시행중인 「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」에 대하여 아래와 같이 예비준공검사를 시행코자 하오니 참석하여 주시길 바랍니다. (부득이 참석이 어려울 경우 건설사업관리단과 협의하여 별도 점검 후 2020.12.4.까지 방재시설부로 결과 제출)

□ 예비준공검사 개요

○ 일시 : 2020.11.30.(월) 10:00~

○ 장소 : 시공사 사무실 및 현장 (서울시 중구 예장동 4-1일원)

○ 검사 및 입회자: 발주처, 유관기관, 기술지원기술자, 책임건설사업관리기술자 등

- 검사자: 공사관리관【방재시설부(토목, 조경분야), 건축부】

※ 기계설비분야 별도 시행

- 입회자

· 시설물 관리기관: 주차계획과, 재생정책과, 푸른도시국(공원녹지정책과, 중부공원녹지사업소), 서부도로사업소, 중구청(도로시설과, 치수과)

· 기술지원기술자

· 책임건설사업관리기술자 및 현장대리인

○ 검사내용: 설계도면 및 공사시방서에 따른 적정 시공여부 확인, 시설물 관리부서 확정 및 의견 반영 등

□ 향후계획

○ 유지관리부서 의견 수합: 2020.12. 4.까지

○ 예비준공검사 지적사항 조치 완료: 2020.12.15.까지

○ 공사준공: 2020.12.30.

○ 시설물 인수·인계(준공도서 관리부서 이관 등): 2020.12.30.까지

붙임  1. 예비준공검사 개요 1부

2. 시설물 관리기관 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(주차계획과장),서 울 특 별 시 장(재생정책과장),서 울 특 별 시 장(공공재생과장),서 울 특 별 시 장(공원녹지정책과장),중부공원녹지사업소장(공원운영과장),서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시중구청장(도로시설과장),서울특별시중구청장(치수과장),건축부장,설비부장
주무관	김소연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	11/26 박홍봉
협조자	주무관	김현곤		주무관	손병도		공원시설과장	이병호
시행	방재시설부-16628	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)	/
전화	02)3708-8763	/전송	02)3708-8756	/	ruracom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)