투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(성수대교북단, 동작대교북단 승강기 구매설치)

한강공원『성수대교북단, 동작대교북단 승강기(엘리베이터) 구매설치』에 사용되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

납 품 요구번호	납품기한		연기 사유
	당 초	변경
12-20-2-37916-00	2020.11.30	2020.12.23	승강기 법안개정에 따른 인증 및 설치검사 지연

붙임 : 1. 관급자재 납품연기 검토보고서 1부.

2. 납품기한 연기의뢰서, 연장요청서 및 합의각서 각 1부.

3. 분할납품요구서 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	김효준		기전설비과장	11/26 최영조
협조자
시행	기전설비과-4901	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)