투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	준공기한연기 승인회신(2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사)

1. 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE20A-11-60호(2020.11.24.)와 관련입니다.

2. 준공기한 연기요청한 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사에 대하여       아래와 같이 승인 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을

기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2020.9.10. ~ 2020.12.8.

다. 준공기한연기 승인내용 : 2020년 12월 8일에서 2020년 12월 23일까지 연기

라. 연기사유 : 강서구 화곡터널입구에 설치한 지주기초를 강서구청 물관리과 하수관         공사 시행업체에서 파손하여 지주기초 재설치를 위한 시공기간 필요.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 11/26 서승완
협조자
시행	기전과-9754	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개