문서번호	토목부-23022
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	11/26 김용제
협조
	주무관		이상근

용역 설계변경(전체 3회, 3차 3회) 검토 보고

(신림공영차고지(저류조포함)건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

2020. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

용역 설계변경(전체 3회, 3차 3회) 검토 보고

【신림공영차고지(저류조포함)건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역】

본 공사의 공사량 증가로 공사기간이 연장됨에 따라 건설사업관리용역의 전체기간 연장 및 투입기간 조정이 필요하여 설계변경코자 검토 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 설계변경 검토 보고(전체3회,2차3회)[토목부-21958('20.11.12.)호]

○ 건설사업관리 설계변경(총괄3회,3차3회)[제일(발)2020-3805('20.11.13.)호]

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 신림공영차고지(저류지포함) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 규    모 : 주차장(버스 101대), 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥)

- 건축면적 : 1,553㎡(관리동, 기타 부속시설), 7,000㎡(지하1층 차고지)

- 주 차 장 : 버스 101대 (지상, 지하1층)

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하2층)

○ 용역기간 : '18. 4. 2. ~ '21. 9.29.(3차 : '20. 1. 1. ~ '20.12.31.)

○ 용 역 비 : 3,379백만원(3차 : 653백만원)

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		설계변경 내용

○ 감리용역 변경 현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
전체 (3회)	용 역 비	*************	*************	*************
	용역기간	********************	*********************	***********
3차 (3회)	용 역 비	***********	***********	*************
	용역기간	*********************	*********************	****

○ 변경사유

- 신림공영차고지(저류조 포함)건설공사 공사기간 연장(증 27개월)에 따른 건설사업관리용역기간 연장(증 27개월)

- 공사물량 증가(증 114억원)에 따른 건설사업관리물량 증가로 투입기간 조정

○ 감리투입현황

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
전체 (3회)	상 주	**********	**********	***********
	비상주	*********	*********	***********
3차 (3회)	상 주	**********	*********	***********
	비상주	*********	********	***********

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기 보고 내용과 같이 “신림공영차고지(저류지 포함) 감독권한대행 등 건설사업관리용역” 전체 3회, 3차 3회 설계변경에 대해 검토한 결과 적정하므로 시행코자 합니다.

붙임 1. 설계변경 내역서(전체 3회, 3차 3회) 각 1부.

2. 감리단 검토의견서 1부.

3. 관련 공문 1부.  끝.