투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	물가변동으로(제1회) 인한 계약변경 의뢰(서울의료원 권역응급의료센터 증축통신공사)

우리 본부에서 시행 중인『서울의료원 권역응급의료센터 증축통신공사』와 관련하여 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회)으로 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축통신공사

2. 계 약 자 : (주)세호영상 대표 박석신

3. 변경내용

구 분	계 약 금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감 액
총 차	589,611,000	612,026,000	************	※공사기간 변동없음
1 차분	250,000,000	258,409,000	************

4. 계약금액 조정사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회)

붙  임 : 1. 합의각서 1부.

2. 건설사업관리단 요청 공문 및 내역서 각1부.

3. 방침서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	박희준		건축설비과장	代박희준		설비부장	11/26 이달영
협조자
시행	설비부-18631	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	gogold79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)