문서번호	교통운영과-18295
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
박태진		임종수	11/26 강진동
협조

「2020년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역」관련

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

도시교통실

(교통운영과)

「2020년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역」관련

설계변경 검토 보고

「2020년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역」시행중 설계 공사비가 변경됨에 따라 설계용역에 대한 설계변경(대가조정)을  추진코자 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역

○ 계약금액 : 금100,696,000원

○ 용역기간 : 2020.6.5. ~ 2020.12.31.

○ 계약업체 : (주)건영이앤씨  대표자 박지명

□ 설계변경 검토

○ 용역 계약금액 변경

(단위:원)

용 역 명	구 분	변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증・감
2020년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역	계	***********	**********	************
	용역원가	**********	**********	************
	손해배상공제료	*******	*******	*********
	부가가치세	*********	*********	***********

- 예산과목 : 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자이동편의 증진,

어린이안전영상정보인프라, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

○ 설계변경 사유

- 설계 공사비 감소에 따른 설계용역 대가 조정

※ 관련근거 : 전력기술관리법 운영요령 제15조(대가 등의 조정) 2호 해당 공사의

설계변경으로 공사계약금액의 조정이 10퍼센트 이상 증감된 경우

○ 설계 공사비 변경내역

(단위:천원)

용 역 명	설계 공사비 (부가세 별도)			비고
	당 초	변 경	증・감
2020년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 실시설계용역	*********	*********	***********

- 공사비 감소 사유 : 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 대상 공사물량 감소

□ 조치의견

○ 상기의 내용과 같이 설계변경(감액)을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 향후일정

○ 2020. 11.    설계변경 시행 및 변경계약 체결

○ 2020. 12.    용역 준공

붙임 : 1. 설계변경 요청 공문 등 각 1부.

2. 설계변경 내역서, 합의각서 각 1부.  끝.