문서번호	도시철도사업부-11462
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동북선1과장	도시철도사업부장
김태성		김용선	11/26 이철
협조	건축계획과장		이병희
	주무관		박중모

『동북선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(4공구)』

계약 내용 및 금액 조정을 위한 설계변경 검토 보고

(총괄 1회, 1차 1회)

2020. 11.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『동북선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(4공구)』

계약 내용 및 금액 조정을 위한 설계변경 검토 보고

(총괄 1회, 1차 1회)

동북선 도시철도 건설사업관리용역(4공구)의 계약내용, 물가변동 및 기술자 투입계획 변경 등에 따른 설계변경 요청에 대한 검토 보고임.

※ 동북선4공구 건설사업관리용역 계약변경 요청(태조 감리부-0012호, ’20.11.18.)

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 동북선 도시철도 민간투자사업(4공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

□ 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링 외 3개사

□ 계약현황

(단위:천원, 부가세포함)

구 분	계 약 일	계 약 기 간	계약금액	비 고
총 차	***********	*********************	*********
1 차	***********	*********************	*******
잔 여		**********************	*********

Ⅱ		보 고 내 용

□ 계약내용 변경

○ 사업시행자와 건설관리기술인간 업무내용 누락에 따른 과업내용서 추가

▶ 변경(추가) 내용

건설공사와 관련된 사항에 대해서는 건설사업관리자는 「발주청(공사관리관)의 공사시행 단계별업무」의‘입회, 검토, 확인, 승인’에 대해 동북선 도시철도 민간투자사업 사업시행자(동북선도시철도㈜)에게 확인 등을 받아야 하며, 필요시 발주청(공사관리관)에 제출하여야 한다.

○ 물가변동 조정방법 개선을 위한 용역계약 특수조건 변경

- 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 동북선 경전철 민간투자사업 실시

협약에 따라 소비자물가지수로 변경

· (당초) 품목조정율 → (변경) 소비자물가지수

□ 물가변동으로 인한 계약 금액 조정

○ 관련근거

-「지방자치단체 용역계약 일반조건」제5절(용역의 착수 및 보고),

제6절(과업내용의 변경, 물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

-「지방자치단체 용역계약 특수조건」제21조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

-「동북선 도시철도 민간투자사업 실시협약」제56조(건설보조금)

- 감리용역 물가변동 조정방법 검토보고(도시철도사업부-10869호, ’20.11.6.)

○ 소비자물가지수 변동율 : *******

- 기준시점(’19.6-입찰공고 직전 월) : ******

- 비교시점(’20.9-지급대상 분기의 직전분기 말) : ******

소비자물가지수 변동율(%)	=	(비교시점 소비자물가지수 - 기준시점 소비자물가지수)					x	100
		기준시점 소비자물가지수
	=	***********************	*	***	*	*****
		******

※ 변동율 : 불변가격 기준시점(‘19.6)부터 지급대상 직전분기 말까지 소비자 물가지수 변동분

○ 물가변동(E/S) 적용(‘20.9.30 기준) : 1차 1회

(단위 : 원)

구분	계약 금액 (1차분)	조정 대상금액 ①	비 대 상 금 액			물가변동 대상금액 ③=①-②	변동율 (%) ④	물가변동액 ⑤=③x④	부가세 ⑥=⑤*(0.1)	물가변동 금액 ⑦=⑤+⑥
			준공 또는 기성	부가세 및 손해보험	소 계 ②
E/S	***********	***********		**********	**********	**********	****	*********	*******	*********

□ 건설사업관리기술인 투입계획 조정

○ 지장수목 제거, 지장물 이설, 토공 등에 따른 건설사업관리기술인 투입

- 투입인원 : 2명(단장 1명 ‘20.8.18, 보조 1명 ’20.9.1)

※ 상주 건설사업관리자 투입계획 보고(도시철도사업부-8210호, ’20.8.13.)

○ 건술사업관리기술인 투입계획 조정

- 총괄 : 변동 없음

- 1차 : ***********

․ 투입기간 : ***********************

․ 등급조정 : ***************

구 분		총 괄 용 역			1 차 용 역
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
계		**********	**********	*	*********	*********	***********
토 목	특급	*********	*********	*	*********	*********	***********
	고급	*********	*********	*	*********	*	***********
	중급	*********	*********	*	*	*********	***********
	초급	*********	*********	*	*	*	*
건 축	고급	*********	*********	*	*	*	*
	중급	*********	*********	*	*	*	*
기술지원 기 술 인	고급	*********	*********	*	*********	*	***********

□ 계약기간 및 계약금액 조정

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총차 1회	’*********** **********	*********	************ *********	*********	************************** **************************
1차 1회	************ *********	*******	************ *********	*******	************************ ************************** ****************

Ⅲ		조 치 계 획

□ 상기 검토내용과 같이 기 계약된 용역계약 내용 중 과업내용서 및 용역계약 특수조건의 물가변동 조정사항을 변경하고,

□ 물가변동(E/S) 반영 및 투입계획을 반영  ‘총괄(1회)’ 및 ‘1차(1회)’ 계약금액을 변경하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 계약변경요청 공문(관련 서류) 1부.

2. 관련공문 각 1부.  끝.