문서번호	토목부-22968
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
최승룡		최진우	11/26 김용제
협조

「개봉철도고가 성능개선공사」

시공상세도 및 준공도서 작성비 반영에 대한 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

「개봉철도고가 성능개선 공사」

시공상세도 및 준공도서 작성비 반영에 대한 검토보고

「개봉철도고가 성능개선 공사」감리단에서 제출한 시공상세도 및 준공 도서 작성비 반영 승인요청 문서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련문서

❍ 실정보고(유신개철20-275호,‘20.11.17) : 실정보고 승인요청(시공상세도 및 준공도서 작성비 반영)

Ⅱ		공사개요

❍ 사업규모 : 교량성능개선(DB18→DB24) B=23m, L=149m

❍ 공사기간 : `19.05.03~‘21.11.02(4차 ’20.09.29~‘20.12.31)

❍ 도 급 비 : 14,850백만원(4차 : 3,600백만원)

❍ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)

❍ 감 리 사 : ㈜유신 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 실정보고

❍ 시공상세도와 준공도서 작성비가 이전비에 반영되어 있어 도급내역 반영에 대한 검토 보고임.

❍ 검토내용

1. 시공상세도

가. 관련 법적 근거 및 지침

(1) 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건

(2) 건설기술진흥법 제48조의 ④항.2 (설계도서의 작성 등)

(3) 건설기술진흥법 시행규칙 제42조의 ② (시공상세도면의 작성)

(4) 건설공사 시공상세도 작성 지침 (국토해양부 2010.6.)

나. 비용 산출방식

(1) 단 가

엔지니어링 사업대가의 기준 제4장 시공상세도 작성비에 근거

요율 공사비	시설물 난이도별 요율(%)
	단순	보통	복잡
100억원 이하	0.54	0.60	0.66
200억원 이하	0.48	0.53	0.58

공사요율〔별표4]에 의한 예정수량〔별표5〕시공상세도 난이도〔별표6에 따른 장당 단가산출

작성 난이도	1장당 단가 산출근거
단 순	{(0.24 × 초급기술자 노임단가) + (0.49 × 중급숙련기술자 노임단가)}
보 통	{(0.34 × 중급기술자 노임단가) + (0.70 × 중급숙련기술자 노임단가)}
복 잡	{(0.20 × 고급기술자 노임단가) + (0.44 × 중급기술자 노임단가) + (0.91 × 중급숙련기술자 노임단가)}

(2) 최종 확정수량

건설사업관리단의 시공상세도 승인 수량 반영

구분		적용 기준	난이도	1장당 단가산출	단가	엔지니어링대가기준		현장반영
						예정 수량	산출액	반영 수량	산출액
공급가= 추정가+ 관급대	150.34 억원	100 ~ 200 억원	단순	초급0.24인+ 중급숙련0.49인	114,953	53	6,092,509	335	38,509,255
			보통	초급0.34인+ 중급숙련0.70인	178,843	3	536,529	-	-
			복잡	고급0.20인+ 중급0.44인+ 중급숙련0.91인	274,865	279	76,687,335	-	-
			계			335	83,316,373		38,509,255
적 용									〇

(3) 예정수량 및 도급비 반영

※ 적용사유 : 당초 설계사의 설계도서를 첨삭, 참조 등 수정하였기에 난이도 단순적용

2. 준공도서

가. 관련 법적 근거 및 지침

(1) 시방서 SMCS 10 10 10 공무행정요건 (1.24 준공서류)

(2) 시방서 SMCS 10 10 35 시공 및 준공요건 1.11 (7)

나. 준공도서 종류, 수량 및 도급비 반영

(1) 보고서, 도면, 계산서, 지반보고서, 수량산출서, 설계예산서, 단가산출서, 공사시방서, 준공도서 CD : 각 5부

(2) 준공도서(문서) 제작 : 50,000매

(3) 도급비 반영

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감		비 고
준공도서 작성비
보고서	-	105	증)	105
도 면	-	329	증)	329
계산서	-	853	증)	853
지반보고서	-	60	증)	60
수량산출서	-	180	증)	180
설계예산서	-	30	증)	30
단가산출서	-	75	증)	75
공사시방서	-	209	증)	209
문서제작	-	5,000	증)	5,000
CD-ROM	-	35	증)	35
직접공사비 계	-	6,876	증)	6,876
기타	-	585	증)	585
도 급 공 사 비	-	7,461	증)	7,461

Ⅳ		감리단 검토의견

❍ 현장실정과 관련규정에 맞는 시공상세도를 작성, 배포하여 공사품질 저하를 방지하고, 추후 교량정보 확보 및 준공정산을 위한 준공도서 작성을 위해 설계에 반영하는 실정보고는 적정하다고 판단되며,

❍ 시공상세도 승인 및 확인절차에 따라 정산함이 타당하다고 판단되고,

❍ 상기공사에 소요된 공사비를 공사계약 일반조건 제6절 (공사설계의 변경)에 따라 설계반영 하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

Ⅴ		조치계획

❍ 시공상세도 및 준공도서 작성비 반영에 대한 검토 내용으로 건설사업 관리단의 의견이 타당하다고 판단되는바 이를 승인하고 추후 설계변경에 반영 정산 하고자 함.

붙임  관련자료 1부.    끝.