문서번호	시설보수과-4225
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
하지훈	代신재현	11/26 조선행
협 조

설계변경 보고(공정안전관리PSM 컨설팅 용역)

2020. 11.

난지물재생센터

[시설보수과]

설계변경 보고(공정안전관리PSM 컨설팅 용역)

‘공정안전관리 PSM 컨설팅’ 용역 건과 관련하여  설계변경 사유가 발생하여 검토 후 다음과 같이 보고드림

1		용역현황

□ 계약기간: 2020. 2. 10. ~ 2020. 12. 23.

□ 계약금액: **************************

□ 계약업체: 라온안전

□ 용역내용

○ 공정안전관리 지도점검 대비 컨설팅

○ 공정안전보고서 보완, 변경사항 up-date

○ PSM 자체감사 진행 후 자체감사 결과보고서 제출

○ PSM 전문화 교육 진행

○ 산업안전보건법 전면 개정에 따른 각 지침, 서식 등 변경사항 up-date

2		설계변경 사유

□ 당초 “공정안전관리 12대 요소별 이행내용 검토 및 지도”로 특급기술자 10 M/D로 계약체결하였으나, 12대 요소별 이행내용 검토 및 지도가 2 M/D로 완료되어 설계변경 실시

3		설계변경 내용

□ 용역 투입인원 감소

○ 공정안전관리 12대 요소별 이행내용 검토 및 지도 “특급기술자” 투입인원 M/D 10일 → M/D 2일 변경

□ 주요 변경내역

(금액단위: 원)

품 명	단위	변경사항		금액
		변경전	변경후	변경전	변경후	증·감
공정안전관리 12대 요소별 이행내용 검토 및 지도	인원/일수 (M/D)	***** ******	***** *****	*********	*******	**********

4		향후계획

□ 용역 투입인원 감소를 반영하여 변경계역 체결

계약금액	변경금액	증감 예산
************	************	*************

□ 예산과목

○ (716-200-207-01) 영업비용,물건비,처리장비,연구개발비,

연구용역비 / PSM(ISO 포함) 대행 용역

붙임 : 1. 실정보고 및 변경내역서  1부.

2. 설계변경 사유서         1부. 끝.