문서번호	설비부-18856
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정인석		오삼록	11/27 이달영
협조

『금천소방서 건립 기계설비공사』

관급자재(지열시스템) 납품기한 연장 검토 보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『금천소방서 건립 기계설비공사』

관급자재(지열시스템) 납품기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『금천소방서 건립 기계설비공사』 관급자재(지열시스템)의 납품기한 연장에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ ***********************

○ *******************************************

○ ********************************

○ **********************************************************

○ ********************************************

○ ********************************

***********************

○ ********************************

Ⅱ		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 (제7절 2.계약기간의 연장)

○ 지열시스템 납품기한 연장 검토보고 [itm 202 제20-0282호 ('20.11.26.)]

Ⅲ		검토내용

○ 계약현황

계약번호	계약자	계약건명	차수	계약기간	계약금액
***********	**** ****	***** ****	**	*************************	************
			**	*************************	************

○ 변경사유 : 선행공정(건축) 준공기한 연장에 따른 납품기한 연장

○ 변경내용

차수	납품기한		계약금액
	당초	변경	당초	변경
***	***********	***********	************	****
***	***********	***********	************

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행공정(건축) 계약기간 연장에 따라 건축공사 공정에 맞춰 지열시스템의 납품기한을 연장하는 것이 적정하다고 사료됨

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 관급자재(지열시스템)의 납품기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.