투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	설계변경 및 준공기한연기 승인 회신(2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사)

1. 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE20A-11-61호(2020.11.24.)와 관련입니다.

2. 설계변경 및 준공기한연기 요청한 2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사에      대하여 아래와 같이 승인 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에

만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2020.6.11. ~ 2020.12.7.

다. 계약업체 : ㈜초이 대표 최행화

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	75,877,900원	93,841,000원	증)17,963,100원

마. 준공기한연기 승인내용 : 2020년 12월 7일에서 2021년 12월 13일까지 연기.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 11/27 서승완
협조자
시행	기전과-9761	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개