문서번호	도시철도계획부-9063
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
조종석		강명석	11/03 정대현
협조
	주무관		이민호

-위례선 도시철도 기본계획 수립 용역- 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

위례선 도시철도 기본계획 수립 용역

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

「위례선 도시철도 기본계획 수립 용역」과 관련하여 추가 과업(입찰안내서 작성)에 따른 설계변경 및 준공기한 연장에 대해 검토  보고 드림.

1		근 거

□ 위례선 도시철도 기본계획 수립 용역 착수(’18. 8.13)

□ 위례선 도시철도 기본계획 승인(’20.10.29)

(대도시권광역교통위원회 광역시설운영과-1685, ’20.10.29.)

**********************************************************

2		용역개요

□ 용 역 명 : 위례선 도시철도 기본계획 수립 용역

□ 용역기간 : 2019. 8. 13.~2020. 11. 7.

□ 용역금액 : 819,894천원

□ 용역업체 : 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소 외 8개사    □ 과업내용

○ 사업위치 : 마천역~복정역, 우남지선

○ 사업규모 : 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

□ 추진현황

○ ’19.08.13. : 용역 착수

○ ’19.12.11. : 용역 변경계약(과업 추가)

○ ’20.06.23. : 기본계획 승인 신청

○ ’20.10.29. : 기본계획 승인(대광위)

**********************************

3		검토사항

***************************************************

*********************************************************************

**************************************

*********************************************

4		검토의견

*******************************************

**************

****************************************

**************

********************************************************

***************

*************************************************************

○ 예산과목 (교통사업특별회계)

- 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금), 광역철도 건설사업, 위례선  도시철도 건설, 시설비

□ 준공기한 연장

*************************************************************************

○ 용역기간 변경내용

구 분	당 초	변 경	증·감
용역기간	’19. 8.13.~’20.11. 7.	’19. 8.13.~’20.12.31.	55일

※ 계약상대자 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

5		조치계획

**********************************************

*********************************************************

*******************************************************************

6		행정사항

□ 계약변경(용역기간 연장)에 대한 합의각서 작성(용역사)

□ 변경계약 의뢰(→총무부)

붙임  1. 추가 과업내용서 및 설계변경 내역서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 기본계획 승인 공문(대광위) 1부.  끝.