문서번호	공원시설과-4939
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
현병철	최연호	11/30 김인숙

『광나루 어린이야구장 조명설치 전기 공사』

설계변경(1회) 검토보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

『광나루 어린이야구장 조명설치 전기 공사』

설계변경(1회) 검토보고

우리본부에서 시행중인 『광나루 어린이야구장 조명설치 전기 공사)』에 대하여 문화재 시굴조사 비용 및 신규공종에 따른 물량 증감을 반영하여 설계변경 하고자 보고 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 광나루 어린이야구장 조명설치 전기 공사

○ 공 사 비

- 도 급 비 : 금60,456,460원

- 관급자재 : 금49,867,840원

○ 공사기간 : 20.6.25. ~ 12.31.

○ 도 급 자 : 센트로건설㈜

설계변경 내용

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
배전,배선공사	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 ▸핸드홀(600*600*600) : 1 → 6개	실정보고 승인통보 [공원시설과 – 4860호 (2020.11.25.)]
문화재 시굴조사비용	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 ▸ 작업반장 : 6일 ▸ 보통인부 : 15일 ▸ 장비 4일 : 06굴삭기 2일 : 03굴삭기 2일	실정보고 승인통보 [공원시설과 – 4860호 (2020.11.25.)]

변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	54,960,418	64,714,782	증) 9,754,364
	부가세	5,496,042	6,471,478	증) 975,436
	도급비계	60,456,460	71,186,260	증) 10,729,800	증
관 급 액		49,867,840	49,867,840
총 공 사 비		110,324,300	121,054,100	증) 10,729,800	증

○ 예산과목

- 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 직영체육시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

(예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

조치의견

○ 위와 같이 문화재 시굴조사 비용 추가 및 신규공정에 따른 물량증감을 반영한 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.