문서번호	공원시설과-4940
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
현병철	최연호	11/30 김인숙

『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(정보통신)』

설계변경(1회) 검토보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(정보통신)』

설계변경(1회) 검토보고

우리본부에서 시행중인 『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(정보통신)』에 대하여 고용개선지원비 집행 매뉴얼 변경 및 신규공종에 따른 물량 증감을 반영하여 설계변경 하고자 보고 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 한강공원 난지캠핑장 리모델링 정보통신 공사

○ 공 사 비

- 도 급 비 : 28,897,100원

- 관급자재 : 60,360,000원

○ 공사기간 : ’20.8.10. ~ ’21.1.2.

○ 도 급 자 : 이룸유비쿼터스㈜

설계변경 내용

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
통신선로 설치공사	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 [통신선로 포설] ▸UTP Cat- 6P : 0 → 210m ▸광케이블 S/M 4C : 0 → 210m ▸광분배함 Mini 4Port : 0 → 2개 ▸광케이블 접속 : 0 → 8 ▸광케이블 시험 : 0 → 8	실정보고 승인통보 [공원시설과 – 4861호 (2020.11.25.)]
고용개선 지원비	◼ 고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼 변경 ▸ 당초 : 고용개선지원비 부가세 제외 ▸ 변경 : 고용개선지원비 부가세 포함	[건설혁신과 – 9310호 (2020.7.20.)]

변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	금 회
도급액	공급가액	25,020,071	30,827,736	5,807,665
	부가세	2,502,007	3,082,774	580,767
	고용개선	1,375,022	공급가액 내 포함	1,375,023
	도급비계	28,897,100	33,910,510	5,013,410	원단위 절삭
관 급 액		60,360,000	60,360,000	0
총 공 사 비		89,257,100	94,270,510	5,013,410	증

○ 예산과목

- 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 난지캠핑장 리모델링, 시설비및부대비, 시설비

(예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

조치의견

○ 위와 같이 고용개선지원비 집행 매뉴얼 변경 및 신규공정에 따른 물량증감을 반영한 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.