문서번호	도시농업과-18263
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도시농업정책팀장	도시농업과장
김동석		한광모	11/30 김광덕
협조

서울먹거리창업센터 확대·이전 운영물품 납품기한 연장(후드, 조명)

2020. 11.

경제정책실

(도시농업과)

서울먹거리창업센터 확대·이전 운영물품 납품기한 연장

서울먹거리창업센터 확대·이전에 따라 구매하는 운영물품 중 후드 및 조명 물품 등에 대해서 공사 일정에 맞춰 납품기한을 연장하고자 함.

□ ‘네트워크 구축 장비 구매 계약’ 납품기한 연기

○ 계약 개요

가. 계약건명 : 서울먹거리창업센터 운영 물품 구매(네트워크 장비)

*****************

다. 계약금액 : 금16,305,000원(금일천육백삼십만오천원)

라. 계약년월일 : 2020.11.23.

마. 착공년월일 : 2020.11.23.

바. 준공기한 : 2020. 11. 30.

○ 납품기한 연장

가. 연기기한 : 2020. 12. 10.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 네트워크장비 납품 설치를 위한 내부 인테리어 공사 미완료

□ ‘조명 및 음향 장비 구매 계약’ 납품기한 연기

○ 계약 개요

가. 계약건명 : 서울먹거리창업센터 운영 물품 구매(조명 및 음향 장비)

*******************

다. 계약금액 : 금17,733,100원(금일천칠백칠십삼만삼천백원)

라. 계약년월일 : 2020.11.24.

마. 착공년월일 : 2020.11.24.

바. 준공기한 : 2020.11.30.

○ 납품기한 연장

가. 연기기한 : 2020.12.10.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 조명 및 음향장비 납품 설치를 위한 내부 인테리어 공사 미완료

□ 향후일정

○ 변경계약(계약기간 연장) 의뢰(→ 재무과)	: ’20.11.30.

○ 물품검수	: ’20. 12.

붙임: 실정보고서 2건.  끝.