문서번호	설비부-18895
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	11/30 이달영

『시립동대문 실버케어센터 건립 소방시설공사』

1차 및 총차 준공기한 연기 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「시립동대문 실버케어센터 건립 소방시설공사」

1차 및 총차 준공기한 연기 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 소방시설공사」시행 중, 선행공정(건축) 지연에 따라 소방시설공사 1차 및 총차 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 검토보고 드림

***************************************************************************

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 소방시설공사

□ 위    치 : 서울시 동대문 답십리동 553외 1

□ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990,95㎡

□ 공사기간 : 총차 ’20.01.22.~’21.06.21.(1차  ’20.01.22.~’20.12.31.)

□ 공사금액 : 총차 385,363,427원(1차 300,000,000원)

□ 도 급 사 : 금광전설(주)

□ 감 리 사 : 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		관련근거

□ 1차 및 총차 공기연장 요청 : PC20(동대문 실버케어)-442호(2020.11.26.)

Ⅲ		검토내용

□ 변경사유 : 선행공정(건축공사)지연으로 인함

□ 변경내용

구분		당초	변경	비고
준공기한	1차	***********	**********.	*****
	총차	***********	**********.	*****
계약금액	1차	************	****
	총차	************	****

□ 건설사업관리기술자 의견

- *****************************************

- **********************************************

- **************************************

Ⅳ		보고자 의견

□ 건설사업관리기술자의 의견과 같이 1차 및 총차 공사 준공기한을 연기하는 것이 타당하다고 판단되므로 총무부로 변경계약 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.