과 장		11/30 한정환		심사자	박세준		설계자	김경욱	설 계	심 사		결 재
									2020년 11월 일	2020년 11월 일
변경설계서(최종)
	○ 공사명 : 2020년 노후포장도로정비(강서1구역) 노면표시공사
	구 분					당 초			변 경		증 · 감
	총 공 사 비					*************			*************		***************
	도급비		공 급 가 액			*************			*************		***************
			부가 가치세			*************			*************		***************
			소 계			*************			*************		***************
○ 공사개요 - 당초 : 차선도색 93,180m, 차로밑그림 93,180m, 차선재도색 654m, 차선제거 1,322m - 변경 : 차선도색 104,161m, 차로밑그림 103,727m, 차선재도색 2,555m, 차선제거 12,891m