투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(시립동대문 실버케어센터 건립 소방시설공사)

우리 본부에서 진행중인 「시립동대문 실버케어센터 건립 소방시설공사」와 관련하여 1차 및 총차 준공기한 연기 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

- 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사

- 계약금액 : *************(총차)

- 공사기간 : 2020.01.22.~2021.06.21.(총차)

- 계 약 자 : 금광전설(주)

나. 변경계약 내용

차수	계약금액		준공기한
	당 초	변 경	당 초	변 경
1차	************	****	***********	***********
총차	************	****	***********	***********

- 준공기한 연기사유 : 선행공정(건축) 지연으로 인함

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	이지영		환경설비과장	김오열		설비부장	11/30 이달영
협조자
시행	설비부-18914	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(7)