문서번호	기전과-12100
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김헌경		11/30 代이동훈
협조
	전문관		김승곤

『2020년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(3차 작업지시)

2020. 11.

동부도로사업소

( 기  전  과 )

『2020년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』 실정보고 검토 보고(3차 작업지시)

『2020년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』와 관련하여 감리업체로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

□ 관련근거

○ 2020년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 3차 작업지시

[기전과-10473(2020.10.20.)]

○ 2020년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 3차 작업지시 실정보고

㈜건영이앤씨 - [건본 2020(신)-186(2020.11.27.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2020년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

○ 공사위치: 강남구 외 3개구 교통신호기 설치

○ 공사내용: 교통신호기 신설 및 개량 1식

○ 계약업체: ㈜제이원스 대표 한은영

○ 계약금액: 금413,590,440원

○ 계약기간: 2020. 2. 26. ~ 12. 28.

○ 감리업체: ㈜건영이앤씨 대표 박준범

□ 제3차 작업지시 내용

○ 작업기간: 2020. 10. 21. ~ 2020. 12. 4.

○ 작업대상: 강동구 공무원아파트 교차로 앞 등 4개소

□ 실정보고 주요내용

지시연번	공사위치	현황 및 문제점	감리 의견	검토 결과	비고 (단위:천원)
1	공무원 아파트 교차로	*기존 P3지주 보행등이 이설로 설계되어 있으나 현장확인결과 보행등 파손으로 인한 교체가 필요함.	*P3 보행등 이설 설치에서 파손 보행등 철거 및 신설로 물량 변경.	적정	▼감 -88
2	천호3동 우편취급국	*제어기(슬림형)설치가 P1지주에 설치되도록 설계 되어 있었으나 P1지주옆 건물로 들어가는 주차 장 출입구가있어 건물 관계자가 현장에서 제어기 위치이동을 요청함. *기존 가로등 등기구 이설로 인한 내역내 신설 물량 삭제 필요. *내역서상 오류로 인한 복구물량 삭제필요.	*기존 주차장쪽을 피하여 우편취급국 P2지주로 제어기 위치변경 물량 반영 및 관련 케이블 물량 조정 반영 *가로등 등기구 신설 물량 삭제 반영 *내역서상 오류로 인한 복구물량 삭제	적정	▼감 -1,295
3	재활용 알뜰장	*전주용 애자밴드 현장에 맞게 수량변경 필요	*전주용 애자밴드 3EA☞2EA	적정	▼감 -44
4	백토공원	*제어기 옆 메인맨홀 H1이 교체로 설계되어 있으나 맨홀내부 상태가 양호하여 재사용 가능함.	*맨홀 교체 물량 삭제 및 맨홀정비 및 프레임 교체 물량 으로 변경 반영	적정	▼감 -443

□ 조치의견

○ 감리업체로부터 접수된 실정보고에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정하다고 판단되어 실정보고를 승인하고 추후 정산하고자 함.

붙임  작업지시 실정보고 각 1부.  끝.