더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2020년 관내2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) - 제3회(최종) 설계변경

우리 구에서 시행 중인 「2020년 관내2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 관내2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2020.03.10. ~ 2020.12.24.

다. 도 급 사 : 광희건설(주) 대표 우광희

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 / 감
총 공 사 비	262,688,620	298,849,000	증	36,160,380
도 급 비	257,688,620	293,849,000	증	36,160,380
이 전 비	5,000,000	5,000,000		-

마. 설계변경 사유 : 별첨

바. 예산과목 : 치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하수도 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 – 증)36,160,380원

붙임  1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 제비율 검증서 1부.  끝.

주무관							이지나				하수담당					오강일					치수과장					代김재준					건설교통국장						11/30 서형석
협조자				주무관							강충구					계약담당							정영임					재무과장								이계선
시행			치수과-20648										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 치수과 (삼선동5가)																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3637							/전송								/	jina0429@sb.go.kr													/	대시민공개