문서번호	설비부-19053
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/01 이달영

『동부간선도로(2~3공구) 도로전광표지판』

설계변경(정산) 검토 보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로(2~3공구) 도로전광표지판』

설계변경(정산) 검토 보고

『동부간선도로(2~3공구) 확장 통신공사』와 관련하여 건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재(도로전광표지판) 설계변경(정산)에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

❍ 공 사 명: 동부간선도로 확장 통신공사(도로전광표지판 구매)

❍ 공사위치: 도봉구 창동 녹천교 ~ 의정부 시계

❍ 납품기간: 2019.12.11. ~ 2020.12.31.

❍ 계약금액: 689백만원

❍ 계약상대자: 삼익전자공업(주)

❍ 건설사업관리단: (2공구)(주)이산 / (3공구)동부엔지니어링(주)

2		검토내용

관련근거

❍ 2공구 설계변경 요청 검토보고[동부2감-20-723호(`20.12.1.)]

❍ 3공구 설계변경 요청 검토보고[동삼감 제2020-337호(`20.11.26.)]

설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 준공에 따른 제경비 정산(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양료 등)

❍ 변경금액                                                    [단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)	비고
총 차	689,000,000	685,798,000	- 3,202,000
1 차	273,735,000	272,392,000	- 1,343,000	3공구
2 차	415,265,000	413,406,000	-1,859,000	2공구

❍ 세부 정산내용                                               [단위: 원]

구 분	총 차		1 차		2 차
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
건강보험료	868,629	-	339,147	-	529,481	-
연금보험료	1,210,164	-	472,496	-	737,668	-
퇴직공제부금비	618,528	-	241,498	-	377,030	-
노인장기보험료	73,920	-	28,861	-	45,059	-
산업안전보건관리비	347,027	208,220	138,806	-	208,220	208,220
계	3,118,268	208,220	1,220,808	-	1,897,458	208,220

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 도로전광표지판 구매 계약의 보험료 정산에 따른 변경설계서를 검토한 결과 계약금액 조정은 적정하다고 판단됨.

3		보고자 의견

❍ 각종 보험료 등을 정산 반영하기 위한 건설관리사업 기술자의 검토보고 내용이 타당하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)에 설계변경(정산)을 의뢰 하고자 함

붙 임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.