문서번호	설비부-19052
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
추한영		오삼록	12/01 이달영
협조

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(수중펌프) 실정보고 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

설 비 부

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(수중펌프) 실정보고 검토보고

승강기(에스컬레이터 포함) 안전검사기준관련 집수정 및 수중펌프 설치 제외 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토보고드림

◦ 변경내용 : ********************************

◦ 변경금액 : ***********************************

1		계약현황

○ 건    명 : 남산예장자락 재생 기계설비공사 수중펌프 구매

○ 계약금액 : ***********

○ 납품기한 : ******************************

○ 계약상대자 : **********

2		관련근거

○ 수중펌프 변경 실정보고      -    남산예장 감리(`20.11.30.)

3		변경내용

○ 변경사유 : 승강기 안전검사 기준에 따라 집수정 미설치

○ 정산내역

(단위 : 원)

******	**	***		***		*****
		*	*	***	***
****	*****	*	*	*********	*********
****	*****	**	**	**********	**********
****	******	*	*	*********	*	**********
****	*****	*	*	*********	*********
***				**********	**********	**********

○ 계약금액 변경

항 목	당초	변경	차 액	비 고
수중펌프	**********	**********	***********

4		건설사업관리기술자 검토의견

○ 펌프 삭제 내용이 적절히 반영되었다고 판단됨

5		조치의견

○ 수중펌프 삭제에 대한 건설사업관리기술자 검토의견이 타당하여 총무부로 변경계약 의뢰하고자 함

따로붙임 : 계약변경 건설사업관리기술자 검토보고 1부. 끝.