문서번호	급수운영과-18600
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최박	代정준석	12/01 한희선
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「방이동 외 14개동 상수도공사」 현장실정보고

2020. 12.

「방이동 외 14개동 상수도공사」

현장실정보고

「방이동 외 14개동 상수도공사」와 관련하여 사토장 변경 요청서가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고합니다.

Ⅰ		현 황

상수도공사 현황

○ 공 사 명: 방이동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: D=15〜300㎜, L=1,205m

○ 공사기간: 2020. 6. 9.~2021. 6. 30.

○ 계약금액: 666,492,710원

○ 도 급 자: (주)경도아이앤디 대표 박남선

※ 잔토처리장 변경 승인 요청-급수운영과-18283(2020. 11. 23.)

Ⅱ		보 고 내 용

사토장 변경

○ 당초 토석정보시스템을 이용하여 경기도 이천시 백사면 도지리 541번지를 사토장으로 설계하였으나, 현재 사토장으로 이용 불가하기에, 경기도 양평군 강상면 교평리 170로 변경하고 운반거리 변경에 따른 운반비를 변경하고자 함.

(운반거리 47.9km → 45.5km)

Ⅲ		조치계획

상기와 같이 사항을 설계변경에 반영하고 중간집하장 및 사토장을 변경시공토록 계약업체에 통보하고자 합니다.

붙임  잔토처리장 변경 승인요청서 1부(별첨).   끝.