문서번호	한옥건축자산과-11741
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
박강덕		최장길	12/01 신동권
협조

2020년 제2차 한옥 노후전기배선 교체공사

준공정산 설계변경 검토 보고

2020. 12.

한옥 노후전기배선 교체 공사

준공정산 설계변경 검토보고

2020년 제2차 한옥 노후 전기배선 교체공사의 과업 물량 변경을 반영한 최종 정산사항을 검토하고 설계변경 처리 후 준공하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 제2차 한옥 노후 전기배선 교체공사

○ 계약기간 : 2020. 11. 5. ~ 12. 3.

○ 계약금액 : 금34,200,000원

○ 계약상대자 : 주식회사 신안전력 (대표 신안선)

□ 설계변경

○ 설계변경 사유

- 공사 대상 변경에 따른 물량 및 금액 감소(13개소 → 12개소)

공종	변경내용		변경사유
	변경 전	변경 후
전기배선 교체공사	13개소	12개소 (2개소 감소, 1개소 증가)	감소(2) : 한옥등록 불가(1),건물주 취소(1) 증가(1) : 추가 신청(1)

○ 변경총액

(단위 : 원)

구분		공사비			비고
		변경 전	변경 후	증감액
합 계		34,200,000	30,000,000	△4,200,000
순공사비	재료비	6,564,574	5,875,955	688,619
	노무비	20,067,051	16,787,627	3,279,424
	경비	1,422,469	722,230	650,239
일반관리비		1,683,245	1,406,148	277,097
이윤		1,353,571	2,430,768	1,077,197
부가가치세		3,109,090	2,727,272	381,818

○ 예산과목

- 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전(일반), 한옥지원센터 운영 및 한옥 유지보수 지원, 일반운영비, 사무관리비

□ 조치의견

○ 변경사항에 대하여 설계변경 하고 공사완료 및 준공처리 하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.