투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(경의선숲길공원 새창고개구간 정비공사)

1. 공원운영과-15582(2020. 11. 26.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건명: 경의선숲길공원 새창고개구간 진입로 정비공사

나. 계약자: 새봄조경에프티 주식회사 대표 공지은

다. 계약금액 : 금31,100,000원(금삼천일백일십만원)

라. 공사기간: 2020. 10. 22.~ 2020. 11. 30.

마. 변경내용: 내역서 변경(금액변경 없음)

○ 식재공사: 계단 및 포장면 주변 잔디물량 추가 반영

○ 시설물공사:  현장여건 반영한 계단규격 조정

○ 포장공사: 경계석 교체 외 1개 항목

○ 제경비: 보험료 정산 외 3개 항목

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		재무팀장	代김호영		공원운영과장	최석환		서부공원녹지사업소장	11/27 남길순
협조자
시행	공원운영과-15696	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)