투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역」준공기한 연기 및 설계변경 계약 의뢰

1. 토목부-23097(2020. 11. 27.)호와 관련입니다

2. 우리 부에서 시행 중인「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 및 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역

나. 용역규모 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계(연결로 5개소, 지하차도 변경 등)

다. 용 역 자 : ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링, ㈜지아이건설기술그룹,  ㈜수성건설엔지니어링

라. 설계변경내역                                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
용역금액	3,089,303,000	3,402,691,000	증)313,388,000
용역기간	'17.8.7.~'20.11.30.	'17.8.7.~'21.02.26.	증)88일

마. 설계변경사유 : ************************************************************************************************

바. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설, 시설비

붙임  1. 준공기한 연기 및 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 건설사업관리 검토의견서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	代박희정		토목부장	11/27 김용제
협조자
시행	토목부-23123	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(7)