투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제목	설계변경 계약심사 서류보완 제출(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

1. 계약심사과-18300(2020.11.23.)호 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비설비공사 계약심사(설계변경)에 따른 변경금액을 조정하고 물량 조정 등 보완 서류를 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경금액: 당초)금3,090,292천원, 변경)금3,042,711천원

나. 변경사유: 물량 조정 및 고용개선지원비 수정

다. 보완자료

- 설계변경 도면 및 수량산출서 일치, 수량집계표 제출, 협의율 근거 제출

붙임: 설계변경 내역서(별도송부)  1부  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	11/27 이달영
협조자
시행	설비부-18735	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개