투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 전기공사」설계변경 및 계약의뢰

우리 본부에서 추진 중인 『옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 전기공사

2. 공사기간: (총차) 2020.06.19. ~ 2021.12.15.

(1차) 2020.06.19. ~ 2020.12.31.

3. 공사금액: (총차) 금84,798,780원

(1차) 금42,399,390원

4. 도급업체: ㈜에스에이치전기 대표 : 김성태

5. 변경사유: 현장여건 변동에 따른 물량 증·감

6. 변경금액

(총차)

구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	77,089,800	84,754,546	7,664,746
	부가세	7,708,980	8,475,454	766,474
	도급비계	84,798,780	93,230,000	8,431,220

(1차)

구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	38,544,900	42,136,364	3,591,464
	부가세	3,854,490	4,213,636	359,146
	도급비계	42,399,390	46,350,000	3,950,610

7. 예산과목: 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 옥수역 하부 한강변 휴식공간 조성, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

붙임  1. 공단공문 2부.

2. 변경내역서 2부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율 검증확인서 2부.

5. 설계변경 보고서 1부.  끝.

							공원부장
주무관							현병철			공원시설과장					최연호					공원부장					11/27 김인숙
협조자				기획예산과장						문영일					총무과장							이상이
시행			공원시설과-4926									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과															/
전화		02-3780-0861						/전송			02-3780-0745					/	qudcjf8441@seoul.go.kr												/	부분공개(7)