투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 계약 기간 변경 의뢰(2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사)

우리부서에서 추진하고 있는「2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사」를 아래 변경 내용과 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약금액 : 금 350,000,000원

다. 계약업체 : 단야공영(주) 대표 김은숙

라. 공사기간 : 2020.03.09 ~ 2020.11.30.

마. 준공기한 연기

- 연기사유 : 난지공원 중앙브릿지에 철제 미끄럼방지시설 파손 민원으로 안전사고 우려가 있어 추가 공사 필요함

- 계약금액 : 변경없음

- 변경 계약기간

· 당  초 : 2020. 03. 09. ~ 2020. 11. 30.

· 변  경 : 2020. 03. 09. ~ 2020. 12. 20.

붙  임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서  1부.

2. 준공기한 연기보고서  1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	기반시설과장
주무관	양정훈		기반시설과장	11/30 라철흠
협조자	총무과장	이상이
시행	기반시설과-4737	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	3780-0677	/전송	02-3780-0744	/	seed22@seoul.go.kr	/	부분공개(5)