문서번호	건축부-20343
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김민희		조승제	11/30 이창구
협조

강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 건설사업관리용역

계약변경(1차, 총차) 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(건축부)

강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 건설사업관리용역

계약변경(1차, 총차) 검토보고

본 공사의 공사기간을 고려한 효율적인 건설사업관리를 위하여 건설사업관리기술인의 배치기간을 연장 및 조정하는 건설사업관리단의 실정보고가 제출되어 검토보고 드림

※ 총 용역비: 증 37,168천원(583,800→620,968천원)

□ 용역개요

❍ 용 역 명: 강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 건설사업관리용역

❍ 용역업체: ㈜건축사사무소 광장 외 1

❍ 계약금액: 금583,800,000원(총차)

❍ 용역기간: 2020.11.20.~2022.03.05.(총차)

❍ 계약현황

구분	계약금액	용역기간	비고
총차	583,800천원	′20.11.20.~′22.03.05.	기존
1차	235,476천원	′20.11.20.~′21.07.31.	기존

□ 실정보고 내용

❍ 보고현황

- 건설사업관리기술인 배치조정 및 변경계약 요청, 광장(건설)2020-11-551(′20.11.27.)

❍ 관련근거

- 용역계약일반조건 제17조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정), 기획재정부예규 제501호(′20.06.19.)

❍ 변경사유

- 본 공사의 준공일자가 건설사업관리용역 완수기한을 넘어 계약체결된바, 용역의 효율적 운영 및 정교한 품질관리를 위하여 책임·건축 건설사업관리기술인의 배치를 연장하고자 함

- 또한 전체공종의 통합적인 사업관리를 위하여 기계 건설사업관리기술인의 배치시점을 앞당겨 전기 건설사업관리기술인과 같은 일자에 투입하고자 함

□ 변경계약 내용

❍ 건설사업관리기술인 배치기간 조정

분야		배치기간		비고
		당초	변경
책임	고급	′20.11.20.~′22.03.05.	′20.11.20.~′22.03.31.	증)26일
건축	중급	′20.12.20.~′22.03.05.	′20.12.20.~′22.03.31.	증)26일
기계	중급	′21.07.01.~′22.02.28.	′21.05.14.~′22.02.28.	증)48일

※ 공사기간: '20.12.2.~'22.3.26.(착공일로부터 480일)

❍ 용역계약 변경

분야		계약내용		비고
		당초	변경
총차	계약금액	583,800천원	620,968천원	증)37,168천원
	용역기간	′20.11.20.~′22.03.05.	′20.11.20.~′22.03.31.	증)26일
1차	계약금액	235,476천원	273,947천원
	용역기간	′20.11.20.~′21.07.31.	′20.11.20.~′21.08.15.

*******************************************

□ 처리의견

❍ 본 공사 준공일자까지 건설사업관리기술인을 배치하여 지정된 기간 내 설계도서에서 정한 시설물을 최적의 품질로 완성할 수 있도록 하고,

❍ 기계 건설사업관리기술인의 배치시점을 앞당겨 전기 건설사업관리기술인과 함께 투입함으로써 전체공종의 원활한 사업관리가 이루어질 수 있도록 변경계약하고자 함

붙임	변경계약 요청공문·배치계획표 및 내역서 일체 1부.  끝.