투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(물순환정책과장)
(경유)
제 목	『휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계용역』계약금액조정 요청

1. 제일(발)-2020-1035호(2020.3.30.)와 관련입니다.

2.『휘경유수지 CSOs저류조 처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역』과 관련하여 아래와 같이 계약금액 조정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약금액 조정 내용

구 분		당 초	변 경	증․감
계약금액	총차	1,108,000,000	1,188,720,000	증)	80,720,000
	2 차	298,000,000	378,720,000	증)	80,720,000

※세부내역 : 붙임 계약금액 조정 검토보고 참조

나. 조정사유 : 설계안전성검토 및 설계경제성검토(VE) 비용 반영

붙임  1. 실정보고 검토서 1부.

2. 계약금액 조정 내역서 각 1부.

3. 계약금액 조정 실정보고 1부(용역사).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김동현		환경시설과장	오열상		방재시설부장	11/30 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-16721	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)