투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	영동대로 지하공간 복합개발 관련 지하안전영향평가용역 설계변경(1차) 의뢰

1. 영동대로복합개발추진단-8687(2020.11.30.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인「영동대로 지하공간 복합개발」관련 “강남권 광역복합환승센터 지하안전영향평가용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 강남권 광역복합환승센터 지하안전영향평가용역

- 용역기간 : '18.5.10 ∼ '20.12.30

- 용역금액 : 100,319,000원

- 용역업체 : ㈜대한콘설탄트 대표 이영민

나. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	계	***********	***********	***************
	공급가액	**********	***********	***************
	부가가치세	*********	**********	***************

다. 변경사유 : 국토교통부 보완사항 반영을 위한 추가과업(GPR탐사) 시행에 따른 계약금액 조정

라. 예산과목 : 광역철도 건설, 광역철도 건설사업, 영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계), 시설비(210-401-01)

붙임  1. 용역변경계획 1부.

2. 용역변경품의서 1부.

3. 설계내역서(변경) 1부.

4. 과업내용서(변경) 1부.

5. 설계변경 합의각서 1부.  끝.

	영동대로복합개발추진단장
주무관	김선만		사업총괄과장	代윤영상		영동대로복합개발추진단장	11/30 이승석
협조자
시행	영동대로복합개발추진단-8692	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 3층	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)