문서번호	급수운영과-27793
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
김미승	代정석균	유동수	12/01 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

「2020년 성동·광진구 상수도 공사 건설폐기물 처리용역(송배수관 및 배급수관 정비공사)」

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2020. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2020년 성동·광진구 상수도 건설폐기물 처리용역(송배수관 및 배급수관 정비공사)」

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

「2020년 성동·광진구 상수도 건설폐기물 처리용역(송배수관 및 배급수관 정비공사)」의 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 용역 현황

◯ 용 역 명: 2020년 성동·광진구 상수도 건설폐기물 처리용역(송배수관 및 배급수관 정비공사)

◯ 계 약 자: ******************************

◯ 계약금액

- 당초: ************

- 변경: **************************

◯ 용역기간: 2020. 4. 27.~2020. 12. 31.

◯ 용역개요: ****************************

□ 설계변경 내용

◯ 설계변경 사유

- 공사 현장여건 변화에 따른 폐기물 처리물량 증·감 발생

- 처리물량 증·감 현황

· 폐아스콘 처리 물량 감소

· 폐콘크리트, 폐토석 운반, 처리 물량 증가

◯ 설계변경 세부내역

- 변경 용역개요

건설폐기물 운반(㎥)				건설폐기물 처리(ton)
	당초	변경	증·감		당초	변경	증·감
폐아스콘	*****	***	********	****	*****	*****	**********
폐콘크리트	**	***	********	*****	***	***	********
폐 토 사	**	***	********	*****	***	***	********
합 계	*****	*****	**********	***	*****	*****	**********

- 용역금액 증·감 현황

(단위: 원)

구 분		금 액		증·감		비 고
		당 초	변 경
총 용역비		**********	**********	*	*********
도급비	공급가액	**********	**********	*	*********	‘붙임’ 내역서 참조
	부가가치세	*********	*********	*	*******
	계	**********	**********	*	*********

□ 심의위원회 개최 현황 및 결과

◯ 개최 일자: *********************

◯ 개최 장소: 급수운영과 사무실(3층)

◯ 참석 위원: ***********

◯ 검토 내용: ******************

◯ 검토 결과: 변경내역에 대하여 적정하다는 심의 의견 제시

□ 향후 계획

◯ 설계변경 사전 심의위원회 개최결과 변경내역에 대해 적정하다는 의견이 제시됨에 따라 제시된 내역으로 설계변경을 시행하고 행정지원과로 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임  1. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.