투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 시행(최종)- 2020년 도로시설물 세척용역(강서)

우리과에서 시행중인 『2020년 도로시설물 세척용역(강서)』과 관련하여 아래와   같이 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2020년 도로시설물 세척용역(강서)

나. 용역개요 : 시설물 37개소(터널5, 지하차도22, 교량등10)

다. 용역기간 : 2020. 4. 10 ~ 12. 31

라. 계약금액 : 396,479,400원(금삼억구천육백사십칠만구천사백원)

마. 도 급 자 : ㈜태경종합관리  대표 이단오

바. 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감		비 고
총용역비		400,129,400	434,715,000	증	34,585,600
도급비	공급가액	360,435,819	395,195,455	증	34,759,636
	부가가치세	36,043,581	39,519,545	증	3,475,964
	계	396,479,400	434,715,000	증	38,235,600
이전비		3,650,000	0	감	3,650,000

사. 변경사유 : 도로시설물 세척 횟수 증가

아. 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설 관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝

	시설보수과장
주무관	강연홍		시설보수과장	12/01 류태용
협조자
시행	시설보수과-7836	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/		/	부분공개(5)