문서번호	공간정보과-6934
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설관리부장
박광수		권승계	12/01 강호광
협 조
	주무관			강정구
	주무관			신정민
	주무관			박현대

『2020년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』

설계변경(1회) 및 2차분 용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

상수도사업본부

(공간정보과)

『2020년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』

설계변경(1회) 및 2차분 용역 시행계획

『2020년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』과 관련하여 설계변경(1회) 및 2차수 용역 시행계획을 보고 드림.

Ⅰ		용 역 현 황

□ 사업명 : 2020년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

□ 사업현황(측량 및 편집 : 416㎞, 3,478,900천원)

구 분		중부,서부지역	동부,북부지역	강서,남부지역	강남,강동지역
용역내용		측량 및 편집 : 104㎞ (신설30,기존74)	측량 및 편집 : 104㎞ (신설25,기존79)	측량 및 편집 : 104㎞ (신설39,기존65)	측량 및 편집 : 104㎞ (신설26,기존78)
용역기간	총차	’20. 4. 1. ～ ’21. 3. 31.
	1차수	’20. 4. 1. ～ ’20. 12. 31.
* * * *	**	*********	*********	*********	*********
	***	*********	*********	*********	*********
*****		***** ********	******* *******	*************	****** ************

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비(상수도 GIS 구축)

Ⅱ		설계변경 내용 및 사유

중부, 서부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	30.0	26.0	감 4.0
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	74.0	78.1	증 4.1
지하시설물도 정위치 편집	㎞	104.0	104.1	증 0.1
누수복구 현장 대응	건	46	16	감 30

❍ 1차수

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	24.2	18.0	감 6.2
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	74.0	78.1	증 4.1
지하시설물도 정위치 편집	㎞	98.2	96.1	감 2.1
누수복구 현장 대응	건	29	15	감 14

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	***********	***********	**********
***	***********	***********	**********
***	*	************	************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

동부, 북부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	25.0	26.9	증 1.9
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	79.0	77.6	감 1.4
지하시설물도 정위치 편집	㎞	104.0	104.5	증 0.5
누수복구 현장 대응	건	54	15	감 39

❍ 1차수

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	18.8	19.0	증 0.2
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	79.0	77.6	감 1.4
지하시설물도 정위치 편집	㎞	97.8	96.6	감 1.2
누수복구 현장 대응	건	54	14	감 40

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	***********	***********	**********
***	***********	***********	**********
***	*	************	************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

강서, 남부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	39.0	41.0	증 2.0
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	65.0	63.6	감 1.4
지하시설물도 정위치 편집	㎞	104.0	104.6	증 0.6
누수복구 현장 대응	건	53	26	감 27

❍ 1차수

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	32.8	33.0	증 0.2
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	65.0	63.6	감 1.4
지하시설물도 정위치 편집	㎞	97.8	96.6	감 1.2
누수복구 현장 대응	건	53	26	감 27

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	***********	***********	**********
***	***********	***********	**********
***	*	************	************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

강남, 강동지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	26.0	21.4	감 4.6
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	78.0	82.5	증 4.5
지하시설물도 정위치 편집	㎞	104.0	103.9	감 0.1
누수복구 현장 대응	건	51	73	증 22

❍ 1차수

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	6	6	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	19.9	13.6	감 6.3
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	78.0	82.5	증 4.5
지하시설물도 정위치 편집	㎞	97.9	96.1	감 1.8
누수복구 현장 대응	건	48	64	증 16

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	***********	***********	**********
***	***********	***********	**********
***	*	************	************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

Ⅲ		2차수 계약

□ 용역기간 : ’21. 1. 1.~’21. 3. 31.

□ 용역현황

구 분	중부,서부지역	동부,북부지역	강서,남부지역	강남,강동지역
용역내용(㎞)	8.0	7.9	8.0	7.8
***** *****	********	********	********	********

Ⅳ		향 후 계 획

□ 용역 성과품 1차수 준공 처리 : 2020. 12. 23.

□ 완료보고회 개최               : 2021.  3.(예정)

□ 용역 최종 준공 처리           : 2021.  3. 31.

붙임 1. 설계변경 내역서(총차,1차) 각 1부.

2. 2차수 계약내역서 각 1부.  끝.