문서번호	정수시설과-8014
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		정재현	12/01 김중영
협 조
	주무관			장현순

「뚝도아리수정수센터 조경관리용역」

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

2020. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

「뚝도아리수정수센터 조경관리용역」

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

『뚝도아리수정수센터 조경관리용역』시행 중 신규공종 발생 등 사업비 변경 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

▢ 심의개요

○ 심의일시 : 2020. 11. 27(금) 10:50 ~

○ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

○ 위원구성

- 위원장 : 정수시설과장 정재현

- 위  원 : 공업6 이진근, 시설7 장현순, 공업7 박원석, 공업7 곽용찬

▢ 심의내용

○ 신규공종 발생 및 공종별 수량 변경

○ 보험료 정산에 따른 설계내역 변경

○ 사업비 변경                                         (단위 : 원)

*****	*****	*****	***********	***
****	***********	**********	***********
*****	***********	**********	***********
*****	**********	*	***********

○ 계약기간 : 변경없음

○ 내역서 단가, 제경비 및 총 계약금액 적정성에 대한 검토

○ 각종 제반규정 준수여부 및 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토

▢ 심의결과

○ 설계변경의 타당성  : 적정함

○ 단가 산출 적정여부 : 적정함

○ 제경비 요율 적정 산정 및 적용 적정성 : 특이사항 없음

○ 각종 제반 규정 준수여부 : 특이사항 없음

○ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 특이사항 없음

▢ 행정사항

○ 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 행정과에 변경계약 의뢰

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의 의견서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 변경합의서 1부.  끝.