문서번호	공원시설과-5037
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		최연호	12/02 김인숙
협 조

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(광나루 배관공사등 물량제외) 검토 보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(광나루 배관공사등 물량 제외) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 서울시설공단 공사감독1처-8218( ̓̕20.11.27.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사

○ 대    상 : 광나루, 잠원수영장

○ 공사기간 :  ̕20. 7. 6. ～ 21. 5. 30(1차분 7.6~12.31).

○ 공사주요 내용

- 상수관로 교체 : 3,49m,

- 보도블록 포장 : 21,822㎡

- 화강판석 설치 : 364㎡

- 기타 관로용접 등 1식

○ 도 급 비 : *************************************

○ 계 약 자 : ********************

○ 감독기관 : ***************

□ 실정보고 내용

○ 광나루 배관공사 물량제외

(광나루 수영장 개장예정에 따른 외부인입관로 타공사에서 공사시행으로

물량 제외)

- 스테인레스배관(용접) 20A~80A  : 318m

- 스테인레스 이음쇠TEE 32A~80A  : 5개

- 스테인레스 이음쇠ELBOW 20A~80A  : 12개

- 스테인레스 이음쇠REDUCER 20A~80A  : 3개

- 스테인레스강관용접접함 20A~80A : 104개소

- BALL VALVE 20A~32A : 4개

- 편닛볼 20A~32A : 6개

- 스테인레스 플랜지 80A : 3개

○ 광나루 보도블록 하부 바닥 콘크리 깨기 및 재포장

(광나루 수영장 보도블록 하부 전구간에 기존에 설치된 콘크리트(H=20cm)가

발견되어 배관설치를 위해 콘크리트 깨기 필요하며, 인입배관 설치 후 외부

하중으로부터 배관보호를 위하여 콘크리트 재포장 필요)

- 콘크리트 포장깨기(광나루) : 증132㎥

- 콘크리트 타설(무근 H20) : 증132㎥

- 폐기물 상차 : 증132㎥

○ 콘크리트 포장 철거물량 변경

(광나루 잠원 수영장 내 탈의실, 조합놀이대(유아용풀), 일대 기초 콘크리트

철거후 보도 블록 포장이 계획되어 있었으나  약 30cm의 철근콘크리트가

타설되어 있고 상태가 매우 양호하여 철거 및 보도포장 물량에서 제외하고

조합놀이대 주변은 보도패턴과 동일한 디자인의 도막형바닥재 설치 필요)

- 콘크리트 포장깨기(광나루) : 감 356㎥

- 콘크리트 포장깨기(잠원) : 감 263㎥

- 폐기물 상차 : 감 356㎥

- 탈의실 철거 및 재설치 : 감 1식

- 도막형바닥재 포장(관급) : 증 1,249㎥

○ 변경 세부내역

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 변경 금액 : 증 3,712천원

- 도급비 : 감 40,884천원,   관급비 : 증 44,596천원

□ 검토 결과

○ 시설공단으로부터 제출받은 검토보고서에 대하여 검토한 결과 한강수영장 개장 예정에 따른 광나루 인입관로 공사 타공사에서 기 시행, 광나루 관로매설시 보도블록 하부 기존 설치된 콘크리트 발견 및 탈의실 하부 등 콘크리트 상태양호 등으로 인한 변경사항으로 적정한 것으로 판단됨

□ 조치 계획

○ 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 우선 시공 조치하고 추후 설계변경에 차질없도록 서울시설공단에 통보 및 자재 변경구매

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.  끝.