문서번호	한옥건축자산과-11766
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
박강덕		최장길	12/02 代박기철
협조

2020년 제2차 한옥 노후전기배선 교체공사

준공정산 설계변경 검토 보고(수정)

2020. 12.

한옥 노후전기배선 교체 공사

준공정산 설계변경 검토보고(수정)

한옥건축자산과-11741(2020.12.01.)호로 보고드린 내용 중 오류가 있어 2020년 제2차 한옥 노후 전기배선 교체공사 최종 정산사항을 검토 및 수정하여 설계변경 처리 후 준공하고자 함

※ 수정내용 : 물량 감소에 따른 이윤을 계약 당시 비율로 감액 조정함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 제2차 한옥 노후 전기배선 교체공사

○ 계약기간 : 2020. 11. 5. ~ 12. 3.

○ 계약금액 : 금34,200,000원

○ 계약상대자 : 주식회사 신안전력 (대표 신안선)

□ 설계변경

○ 설계변경 사유

- 공사 대상 변경에 따른 물량 및 금액 감소(13개소 → 12개소)

공종	변경내용		변경사유
	변경 전	변경 후
전기배선 교체공사	13개소	12개소 (2개소 감소, 1개소 증가)	감소(2) : 한옥등록 불가(1),건물주 취소(1) 증가(1) : 추가 신청(1)

○ 변경총액

(단위 : 원)

구분		공사비			비고
		변경 전	변경 후	증감액
합 계		34,200,000	28,400,000	△5,800,000
순공사비	재료비	6,564,574	5,875,955	△688,619
	노무비	20,067,051	16,787,627	△3,279,424
	경비	1,422,469	772,230	△650,239
일반관리비		1,683,245	1,406,148	△277,097
이윤		1,353,571	976,222	△377,349
부가가치세		3,109,090	2,581,818	△527,272

○ 예산과목

- 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전(일반), 한옥지원센터 운영 및 한옥 유지보수 지원, 일반운영비, 사무관리비

□ 조치의견

○ 수정 내용을 반영하여 설계변경 하고 공사완료 및 준공처리 하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.