문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-5248
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
송석주	김완수	12/02 이정수
협 조

공사 설계변경 보고

(2020년 경춘선숲길 환경개선사업)

2020.11.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

공사 설계변경 보고

(2020년 경춘선숲길 환경개선사업)

우리 사업소에서 시행 중인『2020년 경춘선숲길 환경개선사업』추진 중 다음과 같은 사항에 대하여 설계변경 시행코자 합니다.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 20202년 경춘선숲길 환경개선사업

❍ 공사기간 : 2020. 08. 24 ~ 12. 11

❍ 사 업 비 : ************

************************************

❍ 공사개요 : 철거공사, 시설공사, 식재공사 및 기타 부대공사 등

❍ 도 급 자 : ***********

Ⅱ		변경내역

공 종	단위	변경 수량		증,감	사유	비고
		당초	변경
경계엣지	m	*****	**	******	************	**
현무암판석포장	m2	*		****	***********************	**
경관석놓기	ton	*	*	***	***********************	**
마운드	m2	*	***	*****	***********************	**
야자매트깔기	m	*	**	****	***********************	**
소나무(R25)	주	**	*	***	***********************	**
소나무(R15)	주	*	*	***	***********************	**
소나무(R10)	주	*		***	***********************	**
주목	주	*	*	***	***********************	**
홍단풍	주	*	*	***	***********************	**
청단풍	주	*	*	***	***********************	**
남천	주	***	***	****	***********************	**
줄사철(매트)	M2	**	*	***	***********************	**
낙상홍	주	**	**	****	***********************	**
황금사철나무	주	*	*	***	***********************	**
맥문동(매트)	M2	***	*	*****	***********************	**
감국	본	*	***	*****	***********************	**
범부채	본	*	***	*****	***********************	**
비비추	본	*	****	******	***********************	**
빈카마이너	본	****	***	*****	***********************	**
수크렁	본	*	***	*****	***********************	**
라벤다	본	***	*	*****	***********************	**
숙근사루비아	본	***	*	*****	***********************	**
맥문동	본	*	****	******	***********************	**
롤잔디	M2	***	*	*****	***********************	**
잔디	M2	******	***	*******	***********************	**

Ⅲ		설계변경 후 예상 증감액

❍ 공사비 증・감 내역                                  (단위 : 원)

구분		소요 금액			비고
		**	**	*
총 공 사 비		***********	***********	*********
도급비	소계	***********	***********	**********
	공급가액	***********	***********	**********
	부가세	**********	**********	*********
관 급 자 재 비		***********	**********	***********

Ⅳ		향후계획

❍ 위와 같이「2020년 경춘선숲길 환경개선사업」설계변경 사항을 반영하여 추진하고자 함.

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액검증확인서 1부.  끝.