문서번호	설비부-19162
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		오삼록	12/02 이달영
협조
	주무관		정인석

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

설비분야 준공(납품)기한 연장 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부
(설비부)

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

설비분야 준공(납품)기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 공사』설비분야(기계,전기,통신,소방)공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 공사(기계,전기,통신,소방)

○ ***********************************

○ ******************************************

○ ****

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
******	**** ****	**	***********************	***********
		**	***********************	**********
****	***** ****** ****	**	***********************	*************
		**	***********************	**********
******	**** ***	**	***********************	***********
		**	***********************	**********
****	*****	**	***********************	***********
		**	***********************	**********

○ ***********************************

Ⅱ		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.계약기간의 연장)

○ 설비분야 공사기간 연장요청 검토 보고 (기계설비,전기,통신,소방공사 및 관급재)

[시립CM제2020-144호 ('20.11.30.)]

Ⅲ		검토내용

○ 공사․관급자재 계약현황

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
**************	**** ****	******	**	***********	****
			**	**********	***********	**********
**************	***** ****** ****	****	**	*************	****
			**	**********	***********	***********
**************	**** ***	******	**	***********	****
			**	**********	***********	***********
**************	*****	****	**	***********	****
			**	**********	***********	**********
***********	*****	***** ****	**	***********	****
			**	***********	**********	**********

○ 변경사유 : 선행공정(건축) 지연에 따른 후속공정 기한 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행공정(건축)지연으로 후속공정 설비분야(기계,전기,통신,소방) 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장이 적정하다고 사료됨

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 설비분야공사 및 관급자재의 준공(납품)기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.