문서번호	설비부-19181
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	12/02 이달영
협 조

『시립동대문 실버케에센터 건립 통신공사』

설계변경(총차2회, 2차1회)  검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사』

설계변경(총차2회, 2차1회) 검토 보고

위 공사와 관련하여 신규공종 추가에 따른 설계변경 및 공사기간 연장 요청이 건설사업관리단으로부터 접수되어 검토 후 보고 드림.

**************************************************

*************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 「공사계약일반조건」제19조(설계변경 등)

◌ 설계변경(총차2회, 2차1회) 검토 보고

- PC20(동대문 실버케어)-404(2020.10.28.)호

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사

◌ 공사위치: 서울시 동대문구 답십리동 553외 1

◌ 공사내용: 지하1층/지상4층, 연면적 2,990.95m2, 노유자시설

- 주요설비: 통합배선설비, 비상벨설비, 구내방송 및 통신설비

**************************************************

*********************************************

******************************

***********************

********************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 검토목적

◌ 관급자재 추가 발주에 따른 배관,배선 공사 누락분 반영 및 BF인증 기준에 따라 장애인 화장실 비상벨 추가 반영내역 검토

◌ 선행공정(건축)의 준공기한 변경으로 인한 통신공사 준공일 변경 검토

□ 검토개요

◌ 전관방송 및 CCTV 관급공사 추가 반영으로 배관 및 배선 공사 누락분 반영

- 매립전선관 변경 및 신규공정 추가 관련 실정보고 부분 승인 통보[업무연락전 20-5092(`20.4.28.)]

◌ 비상벨 설비(장애인 화장실) 추가 설치를 위한 배관,배선

- 장애물 없는 생환환경 인증(BF인증) 기준 적용사항 검토지시[업무연락전 20-6747(`20.6.8.)]

◌ 건설일용근로자 고용개선지원비 반영

□ 공종별 주요 증․감 내역

(단위: 원)

품 명	규격	단위	변경내역		증・감 금액		비고
			당초	변경
**** **	*******	*	*	***	**	**********	************
	*******	*	*	***
	**********	*	*	*
	***	*	*	**
	********	*	*	****
	*******	*	*	*
**** **	*******	*	*	***	**	*********	************
	*******	*	*	**
	**************	*	*	**
	*******	*	*	***
*** **	*******	*	***	***	**	*********	*******
	******	*	**	**
	*******	*	***	***

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

구분	공 종	당 초	변 경	증・감		비 고
**	***	**********	**********	**	*********
	***	**********	***********	**	**********
	*********	**********	**********	**	*********
	******	***********	***********	**	**********
	*****	*********	*********	**	*********
	***	**********	**********	**	*********
	*****	**********	**********	**	*********
	*******	*	*********	**	*********
	*****	***********	***********	**	**********
**	***	**********	**********	**	*********
	***	**********	**********	**	**********
	*********	**********	**********	**	*********
	******	**********	***********	**	**********
	*****	*********	*********	**	*********
	***	**********	**********	**	**********
	*****	**********	**********	**	*********
	*******	*	*********	**	*********
	*****	***********	***********	**	**********

□ 공사기간 변경 검토

구 분	당 초	변 경	비 고
***	**********************	*********************
***	*********************	********************

□ 건설사업관리기술자 검토의견

*******************************************************************************************************

*********************************************************

Ⅳ		보고자 의견

******************************************************************************************************

붙임  건설사업관리단 검토 보고 1부.  끝.