문서번호	설비부-19214
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/02 이달영

『동부간선도로(3공구) 확장 통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로(3공구) 확장 통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

『동부간선도로(3공구) 확장 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 공기연장에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명: 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사위치: 상계주공16단지 ~ 의정부시계

❍ 공사규모: 도로확장 4→6차로, 연장 2.25km(방음터널 1.37km)

❍ 주요설비: CCTV, 영상검지기, 도로전광표지판 이설 등

❍ 공사기간: 2017.04.26. ~ 2020.12.31.

❍ 도 급 비: 1,926백만원

❍ 감 리 단: 동부엔지니어링주식회사

❍ 시 공 사: ㈜제일정보통신

2		관련근거

관련근거

❍ 준공기한 연기요청 검토보고[동삼감 제2020-401호(2020.12.2.)]

3		검토내용

❍ 공사기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	`17.04.26.~`20.12.31.	`17.04.26.~`21.12.31.	365일 연장
3 차	`19.07.22.~`20.12.31.	`19.07.22.~`20.12.31.	120일 연장

❍ 연기사유

- ******************************************************************************

❍ 지체상금 부과 여부 : ***

❍ 건설사업관리기술자 의견

- **************************************************************************************************

4		검토의견

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술단이 제출한 통신공사 준공기한 연기에 대한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 준공기한 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙 임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.