문서번호	물순환정책과-21247
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장	물순환안전국장
이해오름	조장환	김재겸	12/02 최진석

『 물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축 용역』

용역 준공기한 연기 보고

2020. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『 물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축 용역』

용역 준공기한 연기 보고

‘물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축 용역’ 수행 중 1차년도 과업의 준공기한 연기사유가 발생하여 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축 용역

○ 기    간 : ’20.08.03. ~ ’22.12.20.(장기계속, 3개년)

- 금회(1차) : 2020.08.03. ~ 2020.12.31.

○ 용 역 비 : 1,169백만원

- 금회(1차) : 248백만원

○ 용 역 사 : ㈜동일기술공사 외 1

- ㈜동일기술공사(60%), 한국건설기술연구원(40%)

○ 주요 과업내용

- 물순환 시설의 지속적인 장기모니터링을 통한 적용효과의 성능 검증 및 유지관리 표준화 방안 마련

- 통신기술을 활용한 실시간 무선 자동 계측시스템 구축 및 유지관리

- 저영향개발 사전협의제도 개선 효과 검증 및 보완

- 물순환 시설 설계·시공·유지관리 매뉴얼의 현장 적합성 검토 및 개선

□ 추진경과

○ ’20.03.13. : 용역 시행계획 수립

○ ’20.08.03. : 용역계약(2회 유찰에 의한 수의계약) 및 1차년도 용역 착수

○ ’20.09.25. : 착수보고회 개최

□ 준공기한 연기

○ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간(1차)	2020.08.03. ~ 2020.12.31.	2020.08.03. ~ 2021.04.30.	120일 연장

**********************

********************

*********

*******************************************************************************************************************************

□ 조치계획

○ 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰(재무과)

붙임 : 합의각서 1부.  끝.