문서번호	도시철도토목부-12756
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		최진규	12/02 최병훈
협조	주무관		노권호
	주무관		서재원

『진접선(4호선 연장) 차량기지1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역』

건설사업관리용역 계약금액 조정 검토보고(총괄1회, 2차1회)

2020. 12.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

건설사업관리기술인 투입계획 조정 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(총괄1회, 2차1회)

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』관련 건설사업관리기술인 투입계획 조정 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고임. ※ ㈜동명기술공단 동기공 제2020-6420호(‘20. 11. 30.)

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2018. 12. 1. ~ 2024. 10. 31.

○ 계약금액 : 금3,803,200천원

○ 계 약 자

- 토  목 : ㈜동명기술공단, ㈜천일, ㈜태조엔지니어링

- 기  계, 소  방 : ㈜혜원까치종합건축사사무소

- 전  기 : ㈜한국이알이시

○ 계약현황

(단위 : 천원)

구분	총괄	계약기간	계약금액	비고
총 괄	2018.10.12.	2018.12.01. ~ 2024.10.31.	3,803,200
1 차	2018.10.12.	2019.01.16. ~ 2019.12.31.	445,950	준 공
2 차	2020.01.01.	2020.01.01. ~ 2020.12.31.	594,000	진행중
장 래	-	-	2,763,250

2		보고 내용

○ 변경 사유

- 물가변동(E/S, 1회)으로 인한 계약금액 조정(지방계약법 시행령 제73조)

․제1회 E/S : 품목조정률 7.58%

구 분	계약일	기준시점	비교시점	품목조정률	적용금액	비 고
1회	‘18.10.12.	‘18.10.02.	‘20.01.01.	7.58%	242,905천원

- 공사공정률에 맞춰 건설사업관리기술자 투입계획 조정

· 총괄1회

구 분		투입인월			투입현황			비고
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
토목	계	275.7	275.7	-	‘18.12.1~’24.10.31	‘19.1.16~’24.10.31	-
	특급	73.66	73.66	-	‘18.12.1~’23.11.30 ‘24.9.1~’24.10.31	‘19.1.16~’23.11.30 ‘24.7.16~’24.10.31	-
	고급	50.00	50.00	-	‘18.12.1~’22.8.31 ‘24.4.1~’24.8.31	‘19.1.16~’22.8.31 ‘24.4.16~’24.10.31	-
	중급	45.65	45.65	-	‘19.9.3~’24.4.2	‘20.3.23~’24.10.22	-
	초급	8.63	8.63	-	‘23.7.1~’24.8.4	‘23.7.1~’24.8.4	-	미투입
	비상주	44.48	44.48	-	‘18.12.1~’24.10.31	‘19.1.16~’24.10.31	-
타분야		29.31	29.31	-	‘22.11.1~’24.4.30	‘22.11.1~’24.4.30	-	미투입

· 2차1회(상주기술자 중급, 1인 : 투입인월 변경)

구 분		투입인월			투입현황			비 고
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
토목	계	42.74	42.40	감)0.34	‘20.1.1~’20.12.31	‘20.1.1~’20.12.31	-
	특급	14.26	14.26	-	‘20.1.1~’20.12.31	‘20.1.1~’20.12.31	-
	고급	12.00	12.00	-	‘20.1.1~’20.12.31	‘20.1.1~’20.12.31	-
	중급	7.93	7.66	감)0.27	‘20.3.16~’20.12.31	‘20.3.23~’20.12.31	감)7일
	초급	-	-	-	-	-	-	미투입
	비상주	8.55	8.489	감)0.07	‘20.1.1~’20.12.31	‘20.1.1~’20.12.31

○ 건설사업관리용역(총괄1회, 2차1회) 변경 현황

구 분	당 초		변 경		증 ․ 감		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총괄 1회	’18.12.01~ ‘24.10.31	3,803,200	’18.12.01~ ‘24.10.31	4,046,105	-	242,905	- 계약기간 : 변경 없음 - 계약금액 : 증)242,905천원 - 사유 ·감리원 투입계획 조정 ·물가변동 반영
2차 1회	’20.01.01~ ‘20.12.31	594,000	’20.01.01~ ‘20.12.31	634,500	-	40,500	- 계약기간 : 변경 없음 - 계약금액 : 증)40,500천원 - 사유 ·감리원(중급) 투입계획 조정 ·물가변동 반영

3		조치 계획

○ 상기 보고내용과 같이「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」건설사업관리기술자 투입계획 조정 및 물가변동(E/S, 1회)에 따른 계약금액조정을 시행코자 함.

붙 임 : 책임감리원 검토의견 및 설계변경 내역서 각1부.  끝.