“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 계약의뢰(암사정수센터 변전실 증축공사 건설폐기물처리용역)

1. 시설과-9242(2020.12.01.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「암사정수센터 변전실 증축공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 계약의뢰를 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 암사정수센터 변전실 증축공사 건설폐기물 처리용역

나. 계 약 자 : ********************************

다. 계약기간 : 2020. 05. 04. ~ 2020. 12. 09.(착수일 :`20. 5. 8)

라. 계약금액 : ************

마. 설계변경(정산) 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변경후	증·감	비 고
계약금액	**********	**********	*************

바. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비(시설비)

[세부사업명 : 암사정수센터 수전전압 변경(22101)]

사. 변경사유 : 건설폐기물 계약물량 증·감 발생

붙 임 : 1. 방침서 및 품의서 각 1부.

2. 변경(정산) 내역서 1부.

3. 건설사업관리자 검토의견서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	시설과장
★주무관	김근모		시설과장	12/02 김형준
협조자
시행	시설과-9290	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1) 상수도사업본부 시설관리부 시설과	/
전화	02-3146-1493	/전송	02********8	/	geunmo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)