문서번호	기반시설과-4781
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		라철흠	12/02 전영주
협조
	주무관		이균휴

『새남터보행육교개선공사』

공사 설계변경 (전체1회,1차1회)시행 보고

2020. 12.

한강사업본부

(시  설  부)

『새남터보행육교개선공사』

공사 설계변경(전체1회, 1차1회) 시행 보고

『새남터보행육교개선공사』와 관련 현장대리인이 제출한 설계 변경물량 및 도급비 변경내용 등을 검토 후 반영하여 설계변경 처리하여 공사에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 새남터 보행육교 개선공사

❍ 위    치 : 용산구 이촌동 389-2(강변북로 한강철교 옆)

❍ 공사기간 : 2020. 06. 06. ～ 2021. 12. 31.

❍ 공사개요 : 기존 보행육교 경관개선, 승강기 신설 및 보행육교 연장설치

❍ 도 급 비 : 1,599,308천원

❍ 시 공 사 : 삼양건설㈜

❍ 계약금액 및 공사기간

(단위:천원)

구 분	총 차	1 차	비 고
계약금액	1,599,308	1,000,000
계약기간	‘20.06.8 ~‘21.12.31	‘20.06.08 ~‘20.12.31

□ 설계변경 사유

❍ 변경근거 : 삼양새남터 제2020-18호(2020.11.25)

❍ 실정보고 승인 사항

- 교통안전시설 누락 반영 : 증 76,565천원

(실정보고 승인 기반시설과 - 3208호, 2020.09.03.)

- 보도교 비계가설 및 분진망 누락 반영 : 증 97,490천원

(실정보고 승인 기반시설과 - 3208호, 2020.09.03.)

- 철거공사수량추가 반영 : 증 450천원

(실정보고 승인 기반시설과 - 4228호, 2020.11.04.)

- 보행 안전도우미 및 교통통제 누락 반영 : 증 25,307천원

(실정보고 승인 기반시설과 - 4228호, 2020.11.04.)

- 난간 기초확장 설치 시공변경 반영 : 감 2,040천원

(실정보고 승인 기반시설과-4228호, 2020.11.04.)

- 계측기설치 반영 : 증 8,084천원

(실정보고 승인 기반시설과-4228호, 2020.11.04.)

- 폐기물상차 및 운반 (처리비) 누락 반영 : 증 2,406천원

(실정보고 승인 기반시설과 - 4228호,

- 설계도서 검토에 의한 공중비계 구조계산 및 검토비용 반영 : 증 3,003천원

(실정보고 승인 기반시설과-4228호, 2020.11.04.)

- 현장여건 변경(핸드레일, 엘보. 도장전처리, 강교 재도장)수량 반영 : 증 5,947천원

(실정보고 승인 기반시설과 - 4399호, 2020.11.12.)

- 경사보도비계 및 천막설치(분진망) 변경 반영 : 증 23,885천원

(실정보고 승인 기반시설과 - 4399호, 2020.11.12.)

❍ 전체분 1회 공사비(도급비)증·감 내용(도급비:281,602천원)

(단위:원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증.감
총사업비	2,191,000,000	2,191,000,000	-
도급금액	1,599,308,000	1,879,743,000	280,435,000
관급자재	158,590,100	169,086,470	10,496,370
이전비	433,101,900	142,170,530	290,931,370

❍ 1차분 1회 계약금액 변경현황(도급비:증210,913,530원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증.감
총공사비	1,300,000,000	1,300,000,000	-
도급금액	1,000,000,000	1,210,913,530	210,913,530
관급자재비	78,590,100	89,086,470	10,496,370
이전비	221,409,900	-	221,409,900

❍ 전체분 주요 공사비 변경 현황

(단위:원)

내 용	당 초	변 경	증 · 감	비 고
새남터보행육교(보수보강)
받침부보강(P3)	26,945,119		26,945,119	기반시설과–3208호 (2020.09.03.)
가설벤트	21,598,670		21,598,670	기반시설과–3208호 (2020.09.03.)
계측비	13,474,525		13,474,525	기반시설과–3208호 (2020.09.03.)
교통안전시설		76,565,478	76,565,478	기반시설과–3208호 (2020.09.03.)
보도육교		84,938,184	84,938,184	기반시설과–3208호 (2020.09.03.)
경사로		12,552,498	12,552,498	기반시설과–3208호 (2020.09.03.)
철거공	5,194,337	3,604,344	1,589,993	기반시설과-4228호 (2020.11.04.)
목재데크포장	20,279,560	23,911,720	3,632,160	기반시설과-4228호 (2020.11.04.)
계측비		8,084,715	8,084,715	기반시설과-4228호 (2020.11.04.)
폐기물상차 및 운반	520,618	2,927,241	2,406,623	기반시설과-4228호 (2020.11.04.)
보행안전도우미/교통통제수		25,307,070	25,307,070	기반시설과-4228호 (2020.11.04.)
공중비계구조계산서비용		3,003,875	3,003,875	기반시설과-4228호 (2020.11.04.)
난간설치	7,088,128	7,873,409	785,281	기반시설과-4399호 (2020.11.12.)
강교재도장	177,319,046	182,481,590	5,162,544	기반시설과-4399호 (2020.11.12.)
◈보도교 비계가설	6,508,944	30,394,104	23,885,160	기반시설과-4399호 (2020.11.12.)
기둥신설	462,848	207,350	255,498
자재운반비	320,264		320,264
자재비	1,409,562	737,789	671,773
계	281,121,621	462,589,367	181,467,746	직접공사비
관급자재비	78,590,100	89,086,470	10,496,370	기반시설과-4399호 (2020.11.12.)
교량난간(관급)	47,744,430	52,699,040	4,954,610
합성목재데크(관급)	30,845,670	36,387,430	5,541,760
계	78,590,100	89,086,470	10,496,370

□ 검토결과

❍ 상기와 같이 제경비 정산 및 실정보고 승인 사항에 대하여 적정성 검토 결과 새남터보행육교 개선공사의 전체분 제1회(1차분 1회) 설계변경 수량 및 금액은 적정한 것으로 사료됨.

❍ 설계변경자문위원회 심의결과 반영: 시설관리과-4805(202012.1)

- 운반비는 경비로 적용(감 1,167,000원)

□ 조치의견

❍ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하여 새남터보행육교개선공사의 품질·안전 관리를 철저히하고 계획된 공정에 따라 공사 완료코자함.

붙  임 : 1) 새남터보행육교개선공사 요청 1부.

2) 설계변경 수량 및 공사비 증·감 현황 1부. 끝.